투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(분뇨이송펌프)

1. 슬러지재활용과-3798(‘15.5.22)호 “ 준공기한 연기신청 승인 및 내역변경” 과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 분뇨처리시설 유입저류조 증설관련 “분뇨 유입저류조 증설공사 분뇨이송펌프 제조구매 설치”에 대하여 아래와 같이 변경계약(계약기간 변경)을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사  유 : “분뇨처리시설 유입저류조 증설공사”의 준공기한 연장에 따른 “분뇨 유입저류조 증설공사 분뇨이송펌프 제조구매 설치” 계약기간 연장

나. 계약기간 변경

- 변경전 : 2014.12.30부터 2015.06.15까지

******************************************************

다. 계약업체 : ㈜지텍

첨부 : 계약변경 관련서류 1부. 끝.

	슬러지재활용과장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	05/27 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-3897	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개