투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	슬러지재활용과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 알림-건설폐기물 처리용역(분뇨 유입저류조 증설 공사)

슬러지재활용과-3876(2015.5.26)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 건설폐기물 처리용역(분뇨 유입저류조 증설 공사)

나. 계약금액 : 금36,597,000원(금삼천육백오십구만칠천원)

다. 계 약 일 : 2014년  11월  04일 (변경계약일 : 2015년 05월 27일)

라. 착 수 일 : 2015년  11월  04일

마. 완수기한 : 78일 연장

- 변 경 : 2015년  08월  17일

- 당 초 : 2015년  05월  31일

바. 변경사유 : ‘분뇨 유입저류조 증설 공사’ 준공기한 연장

사. 계약업체 : ㈜ 수도환경 (대표 김상준) (☎031-864-3131)

㈜ 유진개발 (대표 현광복) (☎ 02-2614-8400)

붙임 : 변경계약서 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	05/27 김홍덕
협조자
시행	관리과-6918	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개