건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제 목	도림천 상류 관악산저류조 설치공사 사업계획 변경 통보

1. 하천관리과-8407(2015. 5.26)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 귀 본부에서 사업 시행중인 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사에 대하여 사업계획변경 조정위원회 심의결과 아래와 같이 사업계획이 변경되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사업비 변경

- 당초 49,419 → 58,174백만원 (증 8,755백만원)

나. 사업기간 변경

- 당초 2012. 1. 6 ∼ 2015. 5.30

→ 2012. 1. 6 ∼ 2017. 5.30

첨부 : 1. 사업계획변경 조정위원회 심의결과 1부.

2. 사업계획변경 방침서 1부.     끝.

	서 울 특 별 시 장
하천관리팀장	김준형		하천관리과장	05/27 정중곤
협조자
시행	하천관리과-8448	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 서소문동 37번지 (덕수궁길 15) 서울시청 서소문 제1별관 8층	/
전화	2115-7911	/전송	2115-7929	/	hyung10@seoul.go.kr	/	대시민공개