투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「남미관 지붕개량및구조체 보수보강공사」준공기한 연기의뢰

1. 시설과-447(2015.05.26)호와 관련입니다.

2.『남미관 지붕개량수및구조체 보수보강공사』와 관련하여 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 공 사 명 : 남미관 지붕개량및구조체 보수보강공사

나. 계 약 자 : 명성건설㈜ 대표 양 준

다. 계약금액 : 일금삼억오천만원정(\350,000,000원)

라. 변경내용

구 분	변 경 내 용		비 고
	당 초	변 경
공사기간	‘15.04.01 ~‘15.06.01	‘15.04.01 ~‘15.06.30	29일간

마. 연기사유

-  기상악화로 인한 절대공기 부족

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도향상, 동물사관리 기능및야생동물 종보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비(401-01)

첨부 : 방침서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이상국		시설과장	05/27 代이춘한
협조자
시행	시설과-3120	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7410	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개