문서번호	건축부-6059
결재일자	2015.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	복지시설과장	건축부장		시설국장
정호기	조영수	김우성		05/28 형태경
협 조
	경리과장		허금도
	인생이모작시설팀장		경완수

『서북권 50+캠퍼스 및 복지타운 조성공사』

설계용역 기간연장 검토 보고

2015. 5

서울특별시 도시기반시설본부

건 축 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서북권 50+캠퍼스 및 복지타운조성』

설계용역 기간연장 검토보고

서북권50+캠퍼스 및 복지타운 조성 설계용역이 아래와 같이 용역기간연장 사유가 발생하여 설계용역 기간연장 검토 보고함

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 서북권50+캠퍼스 및 복지타운 조성 설계용역

○ 위    치 : 마포구 백범로 31길 21(구 한국산업인력공단 부지)

○ 용    도 : 노유자시설

○ 건립규모 : 지하2층/지상10층, 연면적11,027.34㎡(리모델링)

○ 용역금액 : 576,650천원

○ 용역기간 : 2015.01.07 ~ 2015.06.05

○ 설 계 자 : ㈜관 건축사사무소 외 4

Ⅱ		추진경위

○ 2014.09.04 : 서북권 50+캠퍼스 건립공사 의뢰

○ 2015.01.07 : 설계용역 착수

○ 2015.01.15 : 착수회의 개최

○ 2015.01.12 ~ 02.28 : 주관부서 자문회의 및 입주부서 검토회의  등

○ 2015.03.16 : 설계자문회의 개최(건축부 회의실)

○ 2015.04.07 : 기본설계(안) VE 현장조사

○ 2015.04.09 : 기본설계(안) VE 검토회의

○ 2015.04.17 : 기본설계(안) VE 이행회의

○ 2015.05.07 : 설계용역 자문회의개최(2차)

Ⅲ		용역기간 연장 내용 검토

□ 용역기간 조정

○ 조정사유 : 주관부서 자문회의 및 입주부서 검토회의로 용역기간 연장사유 발생

- 주관부서와 수요처 입주협의를 통한 평면 결정에 있어서 2015. 1. 12 ~2.28일까지 약 48일 기간이 소요되었으며 절대공기가 부족하게 되었으며 향후 실시설계 후속 일정이 절대 부족하여 지연된 용역기간 반영 필요

○ 조정내용

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
용역기간	‘15.01.07 ~ ‘15.06.05	‘15.01.07 ~ ‘15.07.05	증30일

□ 연기사유 귀책소재  :  도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부  :  미부과

□ 처리의견

- 건축계획의 기본 평면 결정이 주관부서 및 이를 사용하는 입주처와의 협의 관계로 이를 반영함에 따라 용역의 사업결정 지연으로 설계용역이 지연되어 용역기간이 절대적으로 부족하므로 관련 규정에 따라 용역기간 연장함이 타당함.

Ⅳ		향후추진계획

○ 2015.06 : 실시설계 VE 실시 및 마포구청 건축협의

○ 2015.07 : 설계용역 준공

○ 2015.08 : 공사 및 감리 발주

○ 2015.09 : 공사 착공

따로붙임 : 설계자 기간연장요청 공문서 및 공정표 1부. 끝.