문서번호	급수운영과-11903
결재일자	2015.5.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	05/28 조면행
협조

실 정 보 고 서

(신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사)

2015. 05

강서수도사업소

실 정 보 고 서

우리과에서 시행하는 “신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사” 추진 중 단절관 및 노후관이 발견되어, 이중 굴착으로 인한 예산낭비 및 주민불편 최소화를 위해 본 단위공사 시행과 병행하여 정비코자 함

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2015년 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사위치 : 신월동55-16~82-11간외 7개소

다. 공사개요 : D=20~300mm, L=2,019m

라. 공사기간 : 2015.04.15.~2015.12.12

마. 시 공 사 : 윤석산업(주) 대표 이행철

바. 도 급 비 : 금421,702,390원

2. 보 고 내 용

가. 단위공사 2구간 추진중 경계 부분에 단절관 및 노후관이 발견되었으며 이를

연간단가 계약업체 정비시 도로굴착 및 이중굴착으로 인한 예산낭비 및 민원

발생이 우려되며

나. 단위공사 2구간 공사진행 중에 있어 발견된 단절관 및 노후관을 진행 중인 단위

공사로 정비하여 주민 불편을 최소코자 합니다.

3. 보고자 의견

위와 같은 사유로 인해 단절관 및 노후관 정비공사를 “신월동 55번지외 7개동

배급수관 정비공사”에 아래와 같이 추가 정비될 수 있도록 시설관리공단에

통보코자 합니다.

-   아         래     -

- 공사개요 : D=200mm, L=10m( 2009년 DCIP 상수도관 연결)

- 소요예산 : 10,000천원

ㆍ 도급비 : 6,000천원, 관급비 : 2,000천원, 복구비 및 기타 : 2,000천원

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 배관 부설 상세도 1부.  끝.