문서번호	시설관리과-1468
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
유충현		박희철	05/28 차광재
협 조

안전위험 시설 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

시 설 부

(시설관리과)

안전위험 시설 조치계획 보고

잠실한강공원 자전거도로 노후, 균열 및 산책로 노면 단차로 인해 자전거 이용자와 보행자간 안전사고가 발생되고 있어 이에 대한 조치계획 보고임

Ⅰ		관련근거

□ ‘15년 국가안전대진단 안전관리대책(건설안전과-1209호,’15.1.29)

○ 해빙기 국토자전거길 점검결과 보고(잠실안내센터-445호,’15.3.2)

- 보행로 및 산책로 노면 단차가 높아 보행자 안전사고 우려

□ 셔틀유람선 및 대중교통 접근성개선 추진(행정2부시장 방침 602호.‘15.3.2)

○ 접근성개선(셔틀페리 운영)시범구간(뚝섬~잠실간)주변 환경정비

- 잠실선착장앞 노후된 광장구간 환경정비 시행 필요

Ⅱ		현장 조사결과

○ 잠실헬기장~잠실대교간 자전거도로 Asp포장은 노후, 균열되었고 산책로 Con’c 포장은 열화(세사노출 등)된 상태임

- 연장 약 2.0km, 자전거도로 폭 4.0m, 산책로 폭 3.0m

○ 일부 산책로는 자전거도로와 산책로간 단차가 높아 빈번한 안전 사고가 발생되고 있으며, 성수기전 보수가 긴급히 필요한 실정임

- 단차구간 약 1.1km, 아스팔트와 콘크리트 단차 약 6~10cm

○ 또한 접근성개선 일환으로 셔틀페리 시범구간(뚝섬~잠실간)인 잠실선착장앞 광장내 보도브럭이 노후되고 파손되어 이용시민 매우 불편함

- 주변노후화된 광장환경 개선(잔디브럭조성)통해 셔틀페리 활성화

Ⅲ		조치계획

○ 성수기전 사고 다발지역(단차구간 약 1.0km)에 대해 이용시민의 안전사고 예방 및 불편사항 해소를 위해 자전거도로 및 산책로를 정비(단차 및 노후포장 재포장 등)하고,

○ 잠실 셔틀페리 선착장앞 노후된 광장구간(약 900㎡)에 대하여 잔디브럭을 설치하여 괘적한 공원환경을 조성하고자 하며,

○ 본 공사는 마사토구간 변경(Asp→기존 마사토 정비)으로 감액(약 2.3억원)되는 기반시설 개선공사에 선 작업지시 후설계변경하여 시공하고자 함

- 포장변경 현장실정보고서 : 시설관리과-1074호(‘15.4.23)

위 치 도
Asp와 Con’c 단차	잔디브럭 설치구간
산책로 산책로

○ 주요공종 공사비 내역

- 사업규모

☞ 단차구간 : 연장 약 1.0km, 자전거도로 폭 4.0m, 산책로 폭 3.0m

☞ 광장구간 개선 : 잔디브럭 900㎡

공 종	수 량	단 위	금 액(천원)	비 고
잔디브럭포장	9	a	29,000
아스콘포장	64	a	37,000
보차도경계석	200	m	2,300
토공 및 부대공	1식		67,000
관급자재	1식		103,000
합 계			238,300

첨   부 :  관련공문 및 내역서 1부.  끝.