문서번호	급수운영과-12866
결재일자	2015.5.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
강재성		代강재성	05/28 최명익
협조

설계변경 보고서(2014년 동부수도사업소 관내 건설폐기물처리용역-포장,시설물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5. 28.

동부수도사업소

(급수운영과)

설계 변경 보고서

(2014년 동부수도사업소 관내 건설폐기물처리용역)

『2014년 동부수도사업소 관내 건설폐기물처리용역(포장,시설물)』시행중 시공물량 감소사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

1				용역현황

○ 용 역 명 : 2014년 동부수도사업소 관내 건설폐기물처리용역(포장,시설물)

○ 용역규모 : 당초 폐기물운반 1,680㎥, 폐기물처리 3,417Ton

변경 폐기물운반 772㎥, 폐기물처리 1,524Ton

○ 용역기간 : 2014.05.20. ~ 2015.05.31

○ 도 급 자 : ************

○ 도 급 비 : 당초 ***********

변경 *************************

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 시공물량 감소

○ 시공물량 증･감 현황

- 폐기물 운반 : 폐아스콘 운반 외 2개공정 908㎥ 감소

- 폐기물 처리 : 폐아스콘 처리 외 2개공정 1,893Ton

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
공급가액	**********	**********	***********
부가가치세	*********	*********
도 급 비	**********	**********

4				보고자 의견

○ 위와같은 실정으로 설계변경 사항에 대하여 타당성 여부 등을 검토 및 심의하여 설계변경에 반영코자 우리사업소 설계변경 심사위원회 개최 후 그 결과에 의거 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.