함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(장안동 369-1~430-4호 배급수관 정비공사 교통소통대책 수립용역)

1. 우리사업소에서 시행중인 『장안동 369-1~430-4호 배급수관 정비공사 교통소통

대책 수립용역』의 준공기한을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 장안동 369-1~430-4호 배급수관 정비공사 교통소통대책 수립용역

나. 계 약 자 : (주)현성 교통수기술연구원 대표이사 김연기

다. 계약금액 : 12,311,100원

라. 당초공사기간 : 2015. 04. 03 ~ 2015. 06. 01

변경공사기간 : 2015. 04. 03 ~ 2015. 06. 19

마. 변경사유 : 심의 의결 일정 지연 및 심의 결과에 따른 최종보고서(성과품)                              작성으로 인한 준공기한 연장

바. 귀책사유 : 우리사업소

사. 지체상금 : 미부과

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 과업 연장신청서(합의서) 각 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김재영		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	전결 05/28 오기석
협조자
시행	시설관리과-13494	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13(행당1동 142-1)	/
전화	02-3146-2793	/전송	02-3146-2839	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	대시민공개