투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「보라매공원 복층림 조성 및 벽면녹화 공사」기간연장 시행

1. 우리사업소에서 추진 중인 『보라매공원 복층림 조성 및 벽면녹화 공사』에 대하여 아래와 같이 기간 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 복층림 조성 및 벽면녹화 공사

나. 도 급 액 : 금26,135,800원(금이천육백일십삼만오천팔백원)

다. 공사기간 : 2015. 05. 11 ~ 2015. 06. 04

라. 도 급 자 : 우송조경 주식회사 대표 서진아

마. 공사기간연장

┍ 당초 : 2015. 5. 11 ~ 6. 4

┕ 변경 : 2015. 5. 11 ~ 6. 24(20일 연장)

바. 연장사유 : 양묘장 수목 공급 여건 상 수목 규격 변경 및 벽면녹화 플랜터 변경으로 인하여 제작 등 공정 변경에 따른 공기 부족.  끝.

주무관	김재희		시설팀장	임록화		시설과장	05/29 진병규
협조자	주무관	이전호
시행	시설과-2493	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33(신대방동)	/
전화	02)2181-1160	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	대시민공개