문서번호	하천관리과-8642
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	05/29 정중곤
협조

빗물펌프장 수위계 이중화 사업대상 변경 보고

2015. 05

도시안전본부

(하천관리과)

수위계 이중화 사업대상 변경 보고

‘14년부터 시행중인 빗물펌프장 수위계 이중화사업 관련, 자치구

에서 일부 사업대상 변경 요청이 있어 검토 후 보고 드림.

□ 관련근거

○ 강동구 치수과-5794(2015.5.27) : 수위계 이중화 관련 추가예산 요청

○ 동대문구 안전치수과-8755(2015.5.20) : 수위계 이중화 사업대상 변경 요청

□ 사업개요(2015년 시행분)

○ 대  상 : 빗물펌프장 33개소

○ 내  용 : 수위계 추가 설치 35조/노후 수위계 교체 32조

○ 사업기간 : 2015. 01 ~ 06.

○ 사업비 : 600백만원

※ 수위계 이중화와 함께 20년 이상 경과한 노후 수위계 전수 교체

□ 사업 변경내용

자치구	사 업 내 용		변경사유	비 고
	당 초	변 경 후
동대문구	․수위계 이중화 1개소 (답십리4)	․수위계 이중화 1개소 (장안2)	․초음파수위계 설치 공간 협소하여 설치 불가(장안2로 대체)	오뚜기→플로우트 변경(장안2)
	․수위계 교체 2조 (제기1)	-	․2011년 기 교체
강동구	․수위계 교체 1조 (천호) 10m	․수위계 교체 1조 (천호) 30m	․수위계 규격(10m→30m) 및 노후 분전함 교체	예산 추가요청(10,000천원)

□ 조치계획

○ 검토결과 자치구 의견이 적정하다고 판단되어, 상기 내용과 같이

사업계획 일부 변경코자 하며

○ 사업계획 변경에 따른 자치구 재배정 예산 일부 조정

○ 조정내역

(단위 : 천원)

자치구	기 배정액	조정액	재배정액	비 고
동대문구	21,000	감 10,000	11,000
강동구	6,000	증 10,000	16,000

□ 행정사항

○ 수위계 이중화 사업비 재배정하여 ‘15. 6월중 사업 완료 추진

붙임 : 1) 수위계 이중화 사업대상 변경 요청(자치구) 각 1부.

2) 수위계 이중화사업 변경내용(2015년) 1부.  끝.