투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사 설계변경 시행

1. 여의도공원관리사무소-2974(2015. 5. 27)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『2015년 여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사』에 대한 설계변경을 다음과 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사

나. 공사기간 : 2015. 4. 10 ~  6. 11

다. 계 약 자 : ㈜희담 대표 안성만

라. 계약금액 : 금110,164,100원

마. 변경금액 : 금129,888,000원(증19,723,900원)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총공사비		115,164.100	129,888,000	(증)14,723,900
도급비	공 급 가액	100,149,182	118,080,000	(증)17,930,818
	부가가치세	10,014,918	11,808,000	(증)1,793,082
	계	110,164,100	129,888,000	(증)19,723,900
이 설 비		5,000,000	0	(감)5,000 000

바. 설계변경사유 : 당초 예산부족으로 미반영된 학습교육장 설계반영

사. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경·생태

테마공원육성, 공원·녹지관리 수준향상, 산하공원운영, 여의도공원유지관리, 시설비(100-401-01).

붙임 :  1. 설계변경 계획보고서 1부.

2. 설계변경 도서 각 1부

3. 제비율 검증대장 1부.  끝.

주무관							박진수				시설팀장					김희태					여의도공원관리사무소장					박원근					서부공원녹지사업소장						05/29 안해칠
협조자				주무관							천영자					주무관							김경화					총무팀장								代이정선
시행			여의도공원관리사무소-3059										(						)		접수												(						)
우	150-010					서울 영등포구 여의도동 여의도공원 관리사무소																/
전화		02-761-4079							/전송			02-786-2599					/	micropark@seoul.go.kr													/	대시민공개