함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경에 따른 계약의뢰(1정수장 응집·침전지 보수공사)

1. 우리 정수센터에서 시행중인  『1정수장 응집·침전지 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 후 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 암사아리수정수센터 1정수장 응집·침전지 보수공사

나. 공사기간 : 2014. 5. 29 ~ 2014. 11. 24

다. 도 급 액 : 673,352,000원

라. 도 급 자 : 공항시설관리㈜ 대표 임동만

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

바. 하자담보기간 : 준공일검사일로부터 2년

사. 설계변경 내역(도급비)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감
도 급 비	673,352,000원	657,756,000원	감)15,596,000원

아. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 보험료 정산

붙  임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 심의결과서 1부.

3) 설계변경 방침서 1부.

4) 합의서 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	강희권		정수시설과장	전결 10/30 남효돈
협조자
시행	정수시설과-3201	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사3동)	/
전화	3146-5776	/전송	3146-5707	/	kkaann2@seoul.go.kr	/	대시민공개