문서번호	시설과-2065
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		代김윤철	03/23 이용태
협 조
	주무관			강민수
	주무관			남상국

용산가족공원 지하수 개발계획 보고

2015. 3.

중부공원녹지사업소

시설과

용산가족공원 지하수 개발계획 보고

용산가족공원 연못의 수질개선을 위해 추진중인 용산가족공원 재정비사업의 효과 달성을 위해 지하수 관정 개발을 추진하고자 보고드림.

□ 현  황

○ 연못현황

- 위 치 : 용산구 서빙고동 93-6 용산가족공원내

- 면 적 : 약 5,600㎡ (용량 6,720톤, 깊이 1m내외)

- 형 태 : 자연형, 상·하부 분리

- 수 질 : 지표수의 유입으로 유지되고 있으며, 순환시스템의 부재로 수질악화가 진행되어 악취발생 등 주민 불편민원이 있음

○ 수질개선 대책 : 지하수 공급 및 연못 물순환 시스템 정비로 수질개선

※ 용산가족공원 재정비사업 시행중(‘14.12.18~’15.5.16)

□ 지하수 개발 계획

○ 위    치 : 용산구 서빙고동 93-6 공원내 계류부근

○ 내    용 : 착정공사, 수중모터설치, 상부보호장치설치, 수질검사 등

※ 전기인입 공사부분은 별도 시행

○ 규    모 : 수중모터 1.5kw(2HP), 착정 D200~250mm

○ 소요예산 : 30,000천원

○ 예산과목 : 남산의입체적개발을통한성울의대표공원화, 남산및산하공원운영, 남산및산하공원시설물보수정비, 시설비

○ 계약방법 : 전자공개수의계약(서울지역제한, 해당 자격업체)

※ 단, 4회까지 착정 시도후 필요 수량 부족시 공사중단 및 원상복구하고,

착정실패에 따른 공사비는 도급자 부담, 공사중단시 원상복구는 도급비내 정산

○ 추진일정

- ‘14. 9 ~ 12 : 지하수탐지 및 2015년 예산편성

- ‘15. 3.       : 현장조사(착정가능위치 3개소 확인) 및 계획수립

- ‘15. 3 ~ 4  : 지하수개발 및 계류 연결공사 시행

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

□ 위치도 및 현황사진

텃밭

관리사무소

놀이터

연못

연못

계류

주차장

화장실

국립중앙박물관

공

원

경

계

지하수관정 대상지