문서번호	토목부-11110
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		代한병찬	06/01 代서관석
협조

교통신호기 추가 설치공사 검토 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

도시기반시설본부

(토 목 부)

교통신호기 추가 설치공사 검토 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

본 공사 구간의 교통처리계획에 대한 서울지방경찰청 교통규제심의 변경에 따라 교통신호기를 추가 설치코자 검토 보고하는 사항임.

※관련근거 : 서울지방경찰청 교통관리과-7298(2015.3.23.)

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2 ～ 2015. 6. 30

◦ 도 급 비 : 18,161백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 위치도

◦ 교통신호기를 설치가 설계에 반영되어 있으나 서울지방경찰청 규제 변경으로 교통신호기를 추가 설치 해야함.

■ 교통신호기 추가 설치 내용 : 붙임 참조

■ 공사비 비교

(금액단위:천원)

공 종	공사비 현황(단위:원)			비 고
	당 초	변 경	증⋅감
1. 직접공사비		23,075,187	증) 23,075,187
2. 제 경 비		8,167,216	증) 8,167,216
이 전 비		121,234	증) 121,234
공 급 가 액		31,363,637	증) 31,363,637
부가가치세		3,136,363	증) 3,136,363
도급공사비		34,500,000	증) 34,500,000

■ 감리단 검토의견

◦ 상기 검토내용과 같이, 본 공사의 신호등 설치공사에 대하여 교통신호기 공사중 교통처리 계획도에 의한 변경 규제심의 결과 및 설계물량 정산, 관할 사업소 협의된 내용을 반영하는 것으로 공사 물량은 적정한 것으로 판단되며

◦ 신호등 이설 및 추가 설치에 따른 공사비 산정은 설비부에서 “교통신호등 설치” 설계변경자문회의 실시(‘15.4.20)결과 확정된 단가를 기준으로 작성 되었으며, 이를 적용함이 타당할 것으로 판단됩니다.

■ 조치 의견

○ 상기 감리단 검토의견대로 승인하고 신호기관련 주관부서인 우리본부 시설국 설비부에 실정보고서 검토 요청하고 그 결과에 따라 정산 처리함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증) 35백만원

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 관련공문사본 1부.  끝.