투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	돈화문 국악예술당 건립공사 건설폐기물처리용역 변경계약 의뢰

1.「돈화문 국악예술당 건립공사 건설폐기물처리용역」과 관련하여 폐기물 수량변경에 의한 설계변경 시행에 따라 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 돈화문 국악예술당 건립공사 건설폐기물처리용역

나. 용 역 자 : ㈜인광씨앤티 대표 김형진, 동아공사(주) 대표 박종기

다. 용역기간 : 2013. 12. 06. ~ 2014. 03. 16

라. 계약금액 조정내용                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
용 역 비	18,306,000	37,543,000	증) 19,237,000

붙임 : 1) 설계변경 보고서 1부.

2) 변경내역서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	이진원		문화시설과장	정진수		건축부장	03/04 이병석
협조자	주무관	김현지
시행	건축부-2726	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 시청별관2동2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2629	/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개