함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울특별시 북부병원 개보수공사 승인사항 변경승인 처리

1. 보건의료정책과-2325(2014.01.20.), 서울특별시 북부병원 총무600-047(2014.02.27.)호와 관련입니다.

2. 북부병원 시설물(수탁재산)에 대한 개보수공사와 관련하여 위수탁협약서 제4조제2항에 의거 기 승인처리하였으나, 세부 설계단계에서 일부 개보수사항 변동이 있어 변경승인 요청함에 따라 아래와 같이 처리하고자 합니다.

가. 개보수공사 변경승인요청 내역

○ 대   상 : 서울특별시 북부병원(중랑구 양원역로 38)

○ 세부내역

연번	건 명	당초	변경	비 고
1	재활치료실 확장	현 지상1층 양원홀 및 주변공간(공공의료팀 등)을 개보수하여 재활치료실 확장 신규 재활치료실 확장에 따른 공간연계, 치료업무의 극대화를 위한 기존 공간 재배치 및 관련 내부시설 개보수	당초 승인한 세부공간의 배치 및 구획 변경 세부내역 붙임 도면 참조	지상1층
2	양원홀 이전	현 지하1층 운동실을 개보수하여 지상1층에 있는 양원홀을 이전 필요시 공간활용 효율성 확보를 위한 종교실, 자원봉사실 이전 개보수	종교실, 자원봉사실 위치 기존 유지 기 유지시설인 보관실 위치에 출입문 설치 세부내역 붙임 도면 참조	지하1층

○ 사   유 : 보건의료정책과-2326(2014.1.20)호로 시설물 개보수 기 승인처리하였으나, 설계변경으로 개보수사항 변동사항이 있어 변경승인 요청

○ 소요예산 : 105,600천원(시 보조금)

○ 준공예정일 : 2014년 5월중

나. 처리계획

○ 2013.12.27. 북부병원 제8회 정기운영위원회시 의결된 재활치료실 확장 계획에 따른 후속조치로 2014.1.20에 개보수 공사 기 사전승인처리하였으나, 세부설계과정에서 일부 공간배치에 변동사항이 있어 변경승인 요청한 사항으로, 변경 필요성 인정되므로 승인처리하고 수탁기관(서울의료원) 및 북부병원에 통보하고자 합니다.

붙임  북부병원 개보수공사 변경승인 요청 관련 자료 1부.  끝.

주무관	이종욱		시립병원운영팀장	구장회		보건의료정책과장	03/04 박유미
협조자
시행	보건의료정책과-7191	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 (태평로1가) 4층	/
전화	02-2133-7522	/전송	02-2133-0724	/	jwlee0001@seoul.go.kr	/	대시민공개