건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	에너지관리공단 이사장
(경유)
제목	2015년 신재생에너지 지역지원 보급사업 사업계획 변경승인 요청

1. 산업통상자원부 신재생에너지과-49호(215.01.12) 「2015년 신재생에너지 보급사업(지역지원) 추진계획 통보」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리시 2015년 신재생에너지 보급사업(지역지원) 확정내역 중 아래와 같이 사업계획 변경사유가 발생하여 승인 요청을 하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업계획 변경대상

구분	기초	사업명	에너지원	타입	용량(kW)	사업비(백만원)
						국비	지방비	계
당초	서울특별시	몽촌역사관 태양광발전시설 설치	태양광	고정식	100	160	160	320
변경	서울특별시	몽촌역사관 태양광발전시설 설치	태양광	고정식	39	62.4	62.4	124.8
	노원구	노원고교주변 방음벽개량 및 태양광 발전설비 설치	태양광	고정식	31.2	49.885	49.885	99.77

나. 변경사유 : 몽촌 역사관의 옥상(설치공간) 일부를 향후 사용할 계획으로 설치 규모 축소가 불가피하여  노원고교 주변 방음벽을 이용한 태양광 발전 설비를 추가로 설치함

붙임 : 관련공문 각1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
실무사무관	한상각		햇빛발전팀장	김형섭		녹색에너지과장	06/01 권민
협조자
시행	녹색에너지과-10973	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 덕수궁길 15 11층	/
전화	02)2133-3564	/전송	02)2133-1020	/	snarahan@seoul.go.kr	/	대시민공개