문서번호	방재시설부-7250
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	방재시설부장
고소영	김인숙	06/01 임춘근

- 경춘선 폐선부지 공원조성공사 -

현안회의 결과보고

2015.5

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 경춘선 폐선부지 공원조성공사 -

현안회의 결과보고

경춘선 폐선부지 공원조성공사 준공과 관련 시공품질향상 및 계약금액조정 관련사항 등 관계자 긴급 현안회의를 개최하고 보고드림.

□ 사업개요

○ 위    치 : 노원구 공릉동 공덕제2철도건널목~육사삼거리

○ 규    모 : 48,170㎡, L=1.90㎞

○ 공사기간 : 2013.10.10. ~ 2015.5.15.

○ 사 업 비 : 7,952백만원 (도급비 6,084. 관급비 등 1,868)

□ 추진현황

○ ‘13.10.10 : 공사계약 및 착수

○ ‘14. 3. 31 : 공사 업무이관(푸른도시국→도기본)

○ ‘14. 8.  1 : 보완설계 완료통보(푸른도시국→도기본)

○ ‘14.12.16 : 제3차설계변경(총차, 1~2차 통합)

○ ‘15.  5.15 : 준공계 제출

□ 현안회의 결과

○ 일  시 : 2015. 5. 29.  13:30 ~ 14:30

○ 안  건 : 시공 품질향상 방안, 계약금액 조정 관련사항 등

○ 참석자

‣ 시공사 : SK임업(주) 이희두 현장소장, 이일민 부장

‣ 건설사업관리기술단 : ㈜유신 윤상열 단장

‣ 본부 :  공원시설과장, 고소영, 박계현

○ 회의결과

【 현장에서 합동 점검 】

‣ 석축 및 다칼라블럭포장 시공품질 향상 방안

⇒ 시공사의 보완방안에 대하여 중간점검 후 진행방향 결정

⇒ 설계자, 시공자 현장 점검

⦁ 일  시 : 2015.6.2.(화) 11:00~

⦁ 참석자 : 감리사((주)유신), 설계사(서안), 시공사 합동

⦁ 내  용 : 자료검토 및 현장확인, 시공사 보완방안 검토

‣ 기타 보완사항 조속 조치

【 계약금액 조정 관련 】

‣ 계약금액 조정 관련사항

⇒ 시공사에 계약금액 조정 검토내용 알렸고, 시공사 자체적으로 별도의 조치를 취하겠다고 함.

□ 향후계획

○ 예비준공검사 지적 사항인 석축공사 및 다칼라인조화강석 포장에 대해서는 2015.6.2.(화)일 현장에서 관계자들이 모여 합동 점검 후 조치

○ 기타 보완사항에 대해서는 지속적으로 개선하여 6월 5일전까지 완료하여 준공검사기간내에 완료하도록 조치

○ 계약금액 조정건에 대해서는 시공사 의견 회신결과에 따라 조치.   끝.