투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	통합전면책임감리용역 설계변경 시행에 따른 계약 의뢰(전체10회 및 7차3회)

1. 토목부-11086호(2015. 6. 1.)와 관련됩니다.

2. 우리 부에서 시행중에 있는 “남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사외
1개소 통합전면책임감리용역”에 대하여 따로붙임과 같이 설계변경(전체 10회, 7차 3회) 시행에 따른 재 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사외 1개소 통합전면책임감리용역

나. 용역개요 : 지하차도 4차로, 연장 736m, BOX 355m(개봉역앞)

다. 용 역 비 : 4,853,000천원

라. 용역기간 : 2007. 9.14. ~ 2015. 7.31.

마. 도 급 자 : ㈜동명기술공단, ㈜동일기술공사

바. 준공기한 연기 및 설계변경 내역(전체10회, 7차 3회)

(단위 : 천원)

구 분		용역비 변경 개요				비고
		당 초	변 경	증·감	사 유
전체 9회	용역비	4,853,000	4,853,000	변경 없음	인력 투입 조정에 따른 설계변경
	기 간	‘07.9.14.~’15.7.31 (94.272개월)	‘07.9.14.~’15.7.31 (94.272개월)	변경 없음
7차 2회	용역비	973,000	973,000	변경 없음	인력 투입 조정에 따른 설계변경
	기 간	‘14.2.1.~’15.7.31 (18.000개월)	‘14.2.1.~’15.7.31 (18.000개월)	변경 없음

붙  임 : 1. 설계변경 내역서(전체 10회 및 7차 3회) 각 1부.

2. 방침서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이한규		광역도로과장	진재섭		토목부장	06/01 代서관석
협조자
시행	토목부-11175	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 96(청계천로 8) 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2556	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개