문서번호	설비부-6419
결재일자	2015.6.1.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
정광식	김영수	06/01 박기형

『IT Complex 건립공사(지열설비공사 외 2개 공종)』

하도급 계약변경 검토 보고

2015. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

하도급 계약변경 검토 보고

『IT Complex 건립공사』공사 기간 변경으로 인한 하도급 변경 계약이 체결되어 이에 대한 검토 및 조치의견 보고임.

관련 공문

□ 감리단 실정보고

- 상암ITC감 제15-41호(2015.06.01.) 하도급 변경계약 검토보고

: 지열설비공사, 가스설비공사, 우수.중수설비 설치공사

□ 변경사유 : 공사기간 변경에 따른 하도급 변경 계약

감리 실정보고 내용

□ 공사기간 변경

공 종	업 체	변 경 전	변 경 후	비고
지열설비공사	대림아이엔에스(주)	2014.10.28.~2015.10.06	2014.10.28.~2016.02.29
가스설비공사	㈜아시아에너지	2011.02.18.~2015.10.06	2011.02.18.~2016.02.29
우수.중수설비 설치공사	㈜가야환경	2010.09.01.~2015.10.06	2010.09.01.~2016.02.29

□ 하도급 계약금액 변경 : 변경없음

□ 하도급 계약변경 통지

변경 계약일	통지일(시공사→감리단)	보고일(감리단→발주청)
2015. 05. 18	2015. 05. 28.	2015. 06. 01

검토 및 조치의견

□ 검토의견

- 원도급자인 대림산업(주)의 공사기간 변경에 따른 하도급 업체와의 계약 변경사항으로 하도급자 시공능력, 변경계약 관련 제반서류 검토 결과 적정 함.

□ 조치사항

- 하도급 계약 변경 건에 대해 건설총괄부(건축부 참조)에 통보 조치

따로붙임   하도급 변경계약 기술검토서 각 1부. 끝.