문서번호	물재생과-3536
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
최승룡		강병수	06/01 김동기
협조

『중랑물재생센터 생활체육시설 설치사업 실시설계 용역』 준공기한 연기에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.06.

중랑물재생센터

(물재생과)

『중랑물재생센터 생활체육시설 설치사업 실시설계용역』

준공기한 연기에 대한 검토보고

우리센터에서 시행중인 『중랑물재생센터 생활체육시설 설치사업 실시설계 용역』의 준공기한 연기에 대한 검토 보고임

1		사업개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터 생활체육시설 설치사업 실시설계용역

□ 용역개요 : 축구장 1면 개보수, 족구장 1면 신설 및 1면 개보수

□ 용역기간 : ‘15.04.06 ~ ’15.06.04

□ 용 역 사 : ㈜도정엔지니어링

□ 소요예산 : 13,580천원

2		준공기한 연기

□ 용역기간

- 당    초 : ‘15.04.06 ~ ’15.06.04

- 변    경 : ‘15.04.06 ~ ’15.07.04

□ 연기사유

- 관련사업 검토내용 반영을 위한 절대 공기 부족

• 축구 및 족구 동호회 의견 수렴결과 당초계획 보다 시설면적이 확대되어           추가 측량 및 지장물(수목, 가로등, 배전판 등) 현황조사와 다양한 시설물           (인조잔디, 휀스, 바닥재, 휴게실, 샤워실 등) 설치 요구에 따라 현장 견학           및 제품선정 등에 따른 검토회의 등 많은 시간소요

□ 귀책소재 및 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 중랑물재생센터

- 지체상금 : 미부과

3		조치의견

□ 위와 같이 준공기한을 연기하여 용역시행에 만전을 기하고자 함.    끝.