함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	내발산동 공공기숙사 입주 연기 및 입주대책 안내

1. SH공사 임대건설2팀 - 878호『내발산동 공공기숙사 입주대책(안) 보고』와 관련입니다.

2. 내발산동 공공기숙사 건설공사와 관련하여 기초공법 변경 및 우천 등으로 인한 절대공기 부족으로 공사가 지연되어 2014.3.8일 입주가 어려움에 따라 내발산동 공공기숙사 입주시기를 4월초로 연기하고자 하며,

3. 내발산동 공공기숙사 입주전까지 SH공사 공공임대주택 공가를 이용하여 임대료 및 임대보증금 없이 공공요금을 실비로 납부 받고, 내발산동으로의 이사비용은 사용자 부담으로 하여 입주연기로 인한 학생들의 불편사항을 해결하고자 합니다.

4. 또한, 철저한 공정관리를 통해 2014.4.1일이후 입주 및 준공식을 추진하고자 하오니 많은 협조와 양해 부탁드립니다.

별 첨 : 발산기숙사 대체물량(공공원룸 배정계획 등) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	태안군수(평생교육과장),순천시장(평생학습과),나주시장(교육지원과장),광양시장(교육청소년과장),고흥군수(평생학습사업소장),김천시장(총무과장),경산시장(인재양성과장),예천군수(총무과장)
주무관	안성훈		임대사업팀장	김승수		임대주택과장	03/04 한병용
협조자
시행	임대주택과-2502	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 3층(임대주택과)	/
전화		/전송	3707-9789	/		/	대시민공개