투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	슬러지재활용과장
(경유)
제 목	(납기)변경계약 체결 알림-레미콘(분뇨처리장 유입저류조 증설 공사)

슬러지재활용과-3814(2015.05.22)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 관급자재구매(레미콘-분뇨처리장 유입저류조 증설 공사)

나. 계약금액 : 금149,964,300원(금일억사천구백구십육만사천삼백원)

(조달수수료 별도 : 금769,310원)

다. 계 약 일 : 2014년  12월  24일

라. 납품기한 : 78일 연장

- 변 경 : 2015년  08월  17일

- 당 초 : 2015년  05월  31일

마. 계약사유 : 사용시기 미도래

바. 계약업체 : ㈜삼표산업 (대표 홍성원)

(☎ 02-460-7168)

붙임 : 분할납품요구및통지 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	06/01 김홍덕
협조자
시행	관리과-7086	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	대시민공개