문서번호	교통운영과-10397
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교통개선팀장	교통운영과장
임홍필		유승효	06/02 강진동
협조
	주무관		조혜진

준공기한 연기 보고

(서울역 주변 종합교통체계 개선대책 수립 용역)

2015. 6

도시교통본부

(교통운영과)

준공기한 연기 보고

(서울역 주변 종합교통체계 개선대책 수립 용역)

용역 현황

용역명 : 서울역 주변 종합교통체계 개선대책 수립 용역

위  치 : 서울역 주변 주요 가로 및 교차로

사업내용 : 서울역 주변 주요 가로 및 교차로 개선

- 가   로 : 통일로, 한강대로, 세종대로, 퇴계로, 청파로, 만리재로 등

- 교차로 : 서울역교차로, 염천교교차로, 중림교차로, 서울역서부교차로, 숭례문교차로 등

계약기간 : 2014.10.13. ~ 2015. 6. 9

계약금액 : 80,720,000원

설계사 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

준공기한 연기

당  초 : 2014.10.13. ~ 2015. 6. 9

변  경 : 2014.10.13. ~ 2015. 9. 9

지체상금 : 미부과

연기 사유

과업수행기간중 서울역 주변 종합교통체계 개선안에 대한 교통안전시설 심의(서울지방경찰청) 및 문화재 현상변경 심의(문화재청) 지연에 따른 설계기간 부족

조치의견

향후 추진예정인 실시설계 등 과업추진 일정에 많은 영향을 초래하므로 준공기한을 연기하여 설계용역 수행에 만전을 기하고자 함.

첨 부 : 연기요청 공문 및 계약서 각 1부. 끝.