6월은 호국보훈의 달입니다
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(서울역주변 종합교통체계 개선대책 수립용역)

1. 우리본부에서 시행중인 “서울역 주변 종합교통체계 개선대책 수립 용역”과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 용 역 명 : 서울역 주변 종합교통체계 개선대책 수립 용역

- 용역기간 : 2014. 10.13. ~ 2015. 6. 9.

- 도 급 비 : 80,720,000원

- 용 역 사 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

나. 준공기한 연기

- 당  초 : 2014.10.13. ~ 2015. 6. 9

- 변  경 : 2014.10.13. ~ 2015. 9. 9

다. 연기사유 : 서울역 주변 종합교통체계 개선안에 대한 교통안전시설 심의 및 문화재현상변경 심의 지연에 따른 설계기간 부족

붙 임 : 1. 준공기한연기 검토보고서 및 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

2. 용역계약서 1부. 끝.

	교통운영과장
★주무관	임홍필		교통개선팀장	유승효		교통운영과장	06/02 강진동
협조자
시행	교통운영과-10474	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관1동 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2467	/전송	02-2133-1053	/	ihp@seoul.go.kr	/	대시민공개