투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	실정보고 승인 통보 (서울 한양도성 흥인지문,광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사)

1. 한인감리 20*******01(2015.5.18.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 제출한 ‘서울 한양도성 흥인지문, 광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사’의 실정보고를 아래와 같이 승인하오니, 성곽해체 물량조정에 따른 계약금액조정은 향후 우리본부 계약금액조정절차에 따라 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 승인내용
1) 각자성석이 있는 구간(C면)의 해체 범위 추가 승인
2) 지대석 가공 및 축조방식은 ‘문화재 기술지도 자문회의(4차)’ 안건으로     상정하여 그 결과에 따라 조치 예정.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	한양도성 흥인지문,광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사 문화재감리원 ,한양도성 흥인지문,광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사 현장대리인
주무관	김현지		문화시설과장	안연수		건축부장	06/02 김우성
협조자	전문관	남궁환
시행	건축부-6309	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2627	/전송	02)3708-2659	/	yechi-hj@seoul.go.kr	/	대시민공개