문서번호	정보시스템담당관-6320
결재일자	2015.6.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정보자원관리팀장	정보시스템담당관
김광중		현창기	전결 06/02 서병철
협조

- 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 -

주 간 업 무 보 고

(2015.05.24.~2015.05.30, 13주차)

2015. 6.

정 보 기 획 관

(정보시스템담당관)

『 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 』

주간업무 보고

(2015.05.24. ~ 2015.05.30.)

『2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수』사업 주간업무(13주차) 보고입니다(계약번호 : 20150318153).

Ⅰ		사업개요

사업기간 : 2015. 3. 1. ~ 2015. 12. 31.

*********************

*******************

과업개요

❍ 기 운영하고 있는 공통행정시스템(31종)에 대한 유지보수

❍ 공통행정시스템 기능개선 및 보완개발

❍ 공통행정시스템 보급·공동활용 지원 및 운영체계 개선

❍ 기반 소프트웨어(미들웨어, 검색엔진 등) 및 개발 플랫폼 유지보수

Ⅱ		주간업무 보고

추진실적(13주차)

❍ 추진기간 : 2015. 5. 24. ~ 2015. 5. 30.

❍ 투입현황 : 총 56M/M중 14.78M/M(이전 : 13.7M/M)

❍ 유지보수 처리실적

구분	과업 요청(건수)		과업 완료(건수)		전체 처리 비율(%)	처리 비율(%)
	총누계	요청	총누계	처리
********	498	19	498	19	*****	*****
*******	0	*	0	*	*****	*****
*******	57	4	57	4	*****	*****
**********	18	2	18	2	*****	*****
*	***	**	***	**	*****	*****

사업 진척도

❍ 추진기간 : 2015. 5. 24. ~ 2015. 5. 30.

연번	구분			추진기간	단계	진척율		차주 계획	비고
						계획	실적
1	통합 유지보수			‘15.03.01.~12.31.	유지관리	30%	30%	32%
2	서비스수준협약 체결			‘15.04.01.~04.30.		100%	100%	100%
3	기능개선	일정관리시스템		‘15.04.01.~06.30.	개발	59%	59%	69%	전체일정 4.1.~11.30.
4		품질시험관리시스템		‘15.05.18.~06.30.	분석/설계	30%	30%	48%
5	시스템 정기점검			‘15.03.01.~12.31.	유지관리	30%	30%	32%
6	기타		인터넷민원신청및증명발급시스템(GPKI모듈 : 멀티브라우저 적용)	‘15.04.13.~04.24.	개발	100%	100%	100%	적용테스트 4.27.~5.1.

※ [붙임] 상세 추진실적 및 금주 계획 참조

붙 임 : 1. 상세 추진실적 및 금주 계획 1부.

2. 주간업무 현황보고서 1부.

3. 유지보수 대장 1부.

4. 유지보수 산출물 1부.  끝.