투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(재)한강문화재연구원 원장 신숙정
(경유)
제목	돈화문 국악예술당 건립공사 문화재 시굴조사용역 계약변경 시행 알림

1. 한강문화재연구원 HG1402-052(2014.2.27.)호와 관련입니다.

2.「돈화문 국악예술당 건립공사 문화재 시굴조사용역」에 대하여 설계변경 시행하였음을 알려드리오니 변경계약 등 행정절차 이행에 만전을 기하시기 바랍니다

가. 용 역 명 : 돈화문 국악예술당 건립공사 문화재 시굴조사용역

나. 계 약 자 : (재)한강문화재연구원 원장 신숙정

다. 계약변경 내용

구 분	당 초	변 경	증·감
용역기간	2013.12.06. ~ 2014.03.07	2013.12.06. ~2014.05.07	증) 60일
계약금액(천원)	13,000	87,000	증) 74,000

.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이진원		문화시설과장	정진수		건축부장	03/05 이병석
협조자	주무관	김현지
시행	건축부-2828	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 시청별관2동2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2629	/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개