투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철9호선2단계 917공구 책임감리단
(경유)
제목	지하철9호선2단계 917공구 기계 및 소방설비(기계)분야 실정보고건 승인통보

1. 유탑기감 2015-152호(2015.05.22.)외3건, 유탑기감2015-159호(2015.5.27.)외2건, 선진철감2015-148호(2015.5.20.), 선진철감2015-165호(2015.05. 20 )와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 감리단에서 실정보고한 아래사항에 대하여 승인하니,  물량변동 사항을 설계변경에 반영하여, 서울시설계변경자문위원회 운영기준에 따라 심의 할 수 있도록  자문요청서를  2015.6.5.(금)일 까지 기일지켜 제출 하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 승인건

1) 공조설비 노출덕트 덕트조합폐인트 실정보고

2) 정거장공조여과기 실정보고

3) TAB 본선터널 풍속․소음측정 실정보고

4) 스크린도어 실정보고

5) 자동제어 실정보고

6) 위생설비 실정보고

7) 2호선 교양실 냉방기 실정보고

9) PSD 기계실 모듈러시스템 실정보고

10) 정거장 소화배관 보온 실정보고

12) 본선 연결송수관설비공사(터널소화설비배관보온, 터널연결 배관 시수전환밸브설치)실정보고.

13) 터널 연결송수배관 열선 미시공 실정보고.끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김경수		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	06/02 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-5606	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7292	/전송	02)772-7308	/	kks123@seoul.go.kr	/	대시민공개