문서번호	급수운영과-13557
결재일자	2015.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	소장
남상욱	김태형	최명익	06/03 代백대현
협 조

도로굴착통제 구간내

상수도관부설 검토보고

2015. 06.

동부수도사업소

급수운영과

【도로굴착통제 구간내 상수도관부설 검토보고】

광진구 광장동 아차산로 배수관부설공사 구간 중 일부 아스팔트 도로가 굴착통제 구간에 저촉되어 상수도관을 부설코자 검토하고 보고 드림

Ⅰ		개 요

□ 공 사 명 : 아차산로 배수관 부설공사

□ 공사개요 : D=500mm, L=460m

□ 위    치 : 광진구 천호대로 808 ~ 광장로 89

□ 사업기간 : 2015.05.18. ~ 2015.10.02.

□ 도 급 자 : 동영개발 대표 황 현

Ⅱ		현 황

□ 도로굴착통제구간

○ 위    치 : 광진구 아차산로 611 ~ 광장로 89

○ 연    장 : 85m

□ 추진사항

○ 2015.2.24.:광진구청(도로과)에서 2015년 도로관리심의회 개최하여 심의조정결과 상기 도로굴착통제불가건에 대하여는 가능으로 조정됨

- 상기 결과에 의거 동부수도사업소에서는 본 사업계획에 따른 예산을 확보하여 자재구매, 설계, 발주, 시공업체 계약, 착공 등 사업이 진행중임.

○ 2015.5.21.:아스팔트 통제구간에 대한 굴착을 피하기 위하여  보도구간을 확인 굴착하였으나 많은 타기관 지장물로 인하여  상수도관 부설이 불가능한 상태임

□ 기타사항

○ 본 공사는 광장동 W서울워크힐호텔, 쉐라톤그랜드 워크힐호텔 및 워크힐아파트(1,000여 세대)와 인근 고지대 소출수 민원 을 해소하고자 시행하는 사업으로 하절기 급수사용량 증가로 수돗물 공급량 부족 시 민원 발생이 우려되어 6월 중 공사가  시급하게 이루어져야 할 실정임

○ 도로법 시행령 제56조 제6항 6호 의거 수돗물의 공급을 위하여 주배관시설을 설치하는 공사의 경우 3년 이내 포장된 도로에 도로굴착 가능함.

Ⅲ		검토의견

□ 상기 현황과 같이 광진구 광장동 워크힐아파트 및 워크힐호텔 소출수 민원 해소를 위하여 긴급히 공사 시행하여야 하는바,

□ 성동도로사업소에 협조요청하여 도로굴착통제구간에 대하여 굴착가능토록 하여 원활한 급수공급으로 주민불편을 해소코자 함.

별첨 : 1. 위치도 1부.

2. 2015년 상반기 도로관리심의회 결과알림(광진구청공문) 1부.

끝.