문서번호	시설과-3755
결재일자	2015.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설과장	경영지원부장
곽순길	국중연	06/03 박형중

『백인제가옥 관람 및 운영을 위한 환경개선공사』 준공기한 연기 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역사박물관

(시 설 과)

『백인제가옥 관람 및 운영을 위한 환경개선공사』

준공기한 연기 보고

『백인제가옥 관람 및 운영을 위한 환경개선공사』시행중 관련 공사 미준공으로 공사중 상호 협조사항 발생이 예상되어 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함.

□ 공 사 개 요

공 사 명 : 백인제가옥 관람 및 운영을 위한 환경개선공사

공사기간 : 2015. 5.21 ～ 2014. 6. 04

계약금액 : 20,680,000원

계 약 자 : (주)티엠새한 대표 고주환

공사내용

○ 백인제 가옥(가회동 93-1)

- 기와고르기(약10%) : 대문간채, 중문간채, 안채, 별당채

- 대피소 입구 콘크리트 턱 정비 및 덮개 설치 : 안채뜰

- 판문 2개소 설치 : 중문간채 뒤, 관리동 옆

○ 사무동(가회동 102-1)

- 기와고르기(약 10%)

- 내부 안방과 주방사이 벽체 철거 및 창호지, 벽지, 장판 교체

- 판문(양 옆 담장과 외벽사이) 및 홍살 벽체 설치(담장 위)

□ 준공기한 연기

공사기간 변경

구 분	당 초	변 경	비고
공사기간	‘15. 6.4	‘15. 6.15	11일간

기한연장 사유

- 백인제가옥 조경 보완공사(준공기한 2015년 6월 8일)

- 백인제가옥 CCTV 보완공사(준공기한 2015년 6월 15일)

- 공사소요기간 : 11일 추가 필요

지체상금 부과여부 : 미부과

처리의견

- 백인제가옥 관람 및 운영을 위한 환경개선공사와 조경,CCTV 보완공사를 같이 준공하여 공사간 상충되는 부분을 협의조정하여 공사품질관리에 만전을 기하고자 함.