문서번호	교통운영과-10721
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장	보행친화기획관
이민호	김종호	강진동	06/04 김현식

'15. 중앙버스전용차로

흐름개선사업 추진계획 변경 검토

2015. 6

도시교통본부

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’15. 중앙버스전용차로

흐름개선사업 추진계획 변경 검토

’15년도 중앙버스전용차로 흐름개선사업 추진에 있어 일부 변동사항이 발생함에 따라 민원발생 지점 등을 추가하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

1		현 황

□ ’15년도 예산

○ 중앙버스전용차로 흐름개선 예산 : 1,410,000천원

- 시설비 : 1,407,000천원

- 감리비 :      3,000천원

○ 예산과목(교통사업특별회계)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통정보 제공 및 교통흐름 개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선

□ ’15년도 사업계획(당초)

○ 망우로 시조사삼거리 앞 중앙정류소 신설

○ 종로 등 중앙버스전용차로 설계 용역

○ 경인로 구로세무서 등 중앙정류소 개선

- 경인로 구로세무서 앞 중앙정류소 이설

- 통일로 동명여고 앞 중앙정류소 이설

□ 변동사항 발생

○ 지하철 9호선 개통(강남구간)에 따른 혼잡도 완화대책 필요

- 혼잡도 완화를 위한 대책방안으로 노들길 버스전용차로 신설

○ 추가사업 발생

- 천호대로 한신휴플러스교차로 중앙정류소 기능개선

‣ ’14년도 흐름개선 설계용역(중앙정류소 이용불편 민원)

- 경인로 신도림역 앞 중앙정류소 기능개선

‣ ’14년도 흐름개선 설계용역(교통사고 잦은 지점 개선)

- 신반포로 고속버스터미널역 앞 중앙정류소 기능개선

‣ ’14년도 흐름개선 설계용역(교통사고 잦은 지점 개선)

○ 사업추진 연기

- 통일로 동명여고 앞 중앙정류소 이설

‣ ’15년도 흐름개선 설계용역 중으로 금년도 사업추진 어려움

2		문제점

□ 금년도 예산 범위내 추가사업 추진 곤란

○ 지하철 9호선 개통(강남구간)에 따른 혼잡도 완화대책 조속 추진 곤란

- 현장조사 및 설계 후 관계기관(시경) 협의가 완료된 상태이나 사업비 부족

○ 민원사항(시의원 포함) 설계 완료분 사업추진 필요

- ’14년도 흐름개선 용역 완료사업 사업비 부족

3		대 책

□ 금년도 예산 범위내 사업 우선순위 조정

○ 한정된 예산 범위 내에서 효율적인 사업추진을 위하여 ’15년도 사업대상 조정 시행

- 붙임 “사업대상 조정 계획” 참조

4		행정사항

○ ‘15. 6 ~ 7    규제완료 후 사업비 재배정(도로사업소)

○ ‘15. 6 ~ 12  중앙버스전용차로 흐름개선사업 추진

붙임 : 사업대상 조정계획 1부.  끝.

붙임

사업대상 조정계획

연번	당초		조정				시행 시기	시행 부서
	사 업 명	사업비	사 업 명	사업비	증감	사유
	계	1,407	계	1,405	△2
1	’15.중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역	50	’15.중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역	47	△3		용역 중	교 통 운영과
2	시조사삼거리 앞 중앙정류소 신설	250	시조사삼거리 앞 중앙정류소 신설	300	▲50	사업비 증가 (육교철거비 추가)	6월주민설명회(그 결과에 따라 추진)	성 동 사업소
3	구로세무서 앞 중앙정류소 이설	347	구로세무서 앞 중앙정류소 이설	347	0		6월 재배정	남 부 사업소
4	동명여고 앞 중앙정류소 이설	310	동명여고 앞 중앙정류소 이설	-	△310		연기	서 부 사업소
5	종로 등 중앙버스전용차로 설계용역	450	종로 등 중앙버스전용차로 설계용역	450	0		계획 중	교 통 운영과
6	-		노들길 버스전용차로 설치	46	▲46	9호선 개통(강남구간)에 따른 혼잡도 완화대책	6월 재배정	강 서 사업소
7	-		한신휴플러스교차로 앞 중앙정류소 기능개선	54	▲54	’14년 흐름개선 설계용역 (중앙정류소 이용 불편민원)	“	성 동 사업소
8	-		신도림역 앞 중앙정류소 기능개선	118	▲118	’14년 흐름개선 설계용역 (교통사고 잦은 지점 개선)	“	남 부 사업소
9	-		고속버스터미널 앞 중앙정류소 기능개선	43	▲43	’14년 흐름개선 설계용역 (교통사고 잦은 지점 개선)	“	남 부 서초구