문서번호	토목부-11482
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	06/04 代서관석
협조

기존구조물 깨기 및 폐기물처리 검토 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

도시기반시설본부

(토 목 부)

기존구조물 깨기 및 폐기물처리 검토 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

본 공사에서 발생하는 구조물 깨기와 건설폐기물에 대하여 중간 정산하여 처리코자 검토 보고하는 사항임.

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2 ～ 2015. 6. 30

◦ 도 급 비 : 18,161백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 위치도 : 붙임 참조

◦ 본 현장 전반의 기존구조물 깨지 및 건설폐기물 처리에 대하여 각각의 개소마다 수량 누락 및 물량이 상이한 상태임

■ 구조물 깨기 및 수량 검토 내용 : 붙임 참조

■ 공사비 비교

(금액단위:천원)

공 종	공사비 현황(단위:원)			비 고
	당 초	변 경	증⋅감
총 공 사 비	205,590	292,930	증) 87,340
도 급 비	102,740	143,990	증) 41,250
폐기물처리비	102,850	148,940	증) 46,090

■ 감리단 검토의견

◦ 현장 실측으로 인한 수량 변동사항을 정산하였고, 서원마을 대체녹지 조성을 위한 가옥철거 2채 등 추가물량과 암사대교 현장 경계부의 누락수량이 추가 되었으며

◦ 강일삼거리 확장구간의 미시공은 당초대로 계상하였음

◦ 단가 구성은 기존단가를 적용하였으며 발주처 승인을 거쳐 추후 설계변경시 반영하고자 함.

■ 조치 의견

○ 상기 감리단 검토의견대로 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨

- 개략공사비 : 증) 87백만원

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.