문서번호	도시공간개선단-5933
결재일자	2015.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관		연구1팀장		도시공간개선단장
황성주		육근형		06/04 김태형
협 조
	공공재생과장				김성보
	역사재생팀장				이창훈
	주무관				천주영
	주무관				임종현
	주무관				이석현

- 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업을 위한 -

설계 현상공모 관리용역 시행계획(안)

2015. 6.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	6월19일 정책위 안건 상정예정
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	용역업체 선정 후 검토 예정
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

세종로 일대 역사문화 특화공간 조성사업을 위한

설계 현상공모 관리용역 시행계획(안)

세종로 일대 역사문화특화 공간 조성을 위해 실시하는 설계 공모의 원활하고 효율적인 추진을 위하여 공모 전반에 관한 사항을 종합적으로 관리․운영할 수 있는 전문기관을 대상으로 관리용역을 시행하고자 함

1		추진개요

□ 추진배경 및 목적

○ 창의적 설계안 수렴 및 사회적 공감대 형성을 위해 공모 실시

○ 공모 관리 및 운영을 전문기관에 맡겨 원활하고 효율적으로 추진

○ 홍보전략 마련을 통한 공모의 역사적 가치의 제고 및 많은 참여 유도

□ 추진경위

○ '14. 6. 26  : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성방안 연구 추진계획

○ '14.10.10   : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업 추진 기본계획(안)

○ '15. 2. 4   : 국세청 별관 철거공사 의뢰 (공공재생과 → 도기본 건축부)

○ '15. 5.21   : 사업시행계획 및 현상공모 추진계획 수립

○ '15. 5.28  : 기술용역타당성 심사결과통보 (기술심사담당관 → 공공재생과)

	<설계 공모 개요>
❚ 공모목적 : 공모를 통한 역사적 가치의 회복 및 창의적 아이디어 수렴 ❚ 응모자격 : 건축사법에 의한 건축사자격을 소지한 전문가 ❚ 공모범위 : 기준년도 `15년 / 목표연도 `16년, 사업대상지 마스터플랜 및 기본설계 ❚ 공모내용 - 국세청 별관 건물 철거 및 역사문화광장 조성 - 별관 지하부의 잔여부지를 지하공간으로 조성하여 기존 덕수궁 지하보도와 연결함으로써 시민청과 시청역과 연계

2		용역 시행계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 세종로 일대 역사문화 특화공간 조성을 위한 공모 관리용역

○ 용역기간 : `15. 6.~`15. 9.(4개월)

○ 용 역 비 : 150.7백만원

○ 예산과목 : 공공재생 계획 수립, 공공개발 및 공공공간 확충, 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)(국내현상설계공모비 총200,000천원)

○ 시행방법 : 일반용역(시행계획 수립 후 계약심사 의뢰 예정)

○ 과업내용

- 기획․홍보․진행․관리․운영 등 공모 사전기획 및 추진

- 공모지침서 작성, 공모 실시 및 심사 지원

- 홍보 및 홈페이지 구축․운영

- 시상 준비 및 지원, 작품 전시 및 활용방안 마련, 작품집 제작 및 발송 등

	<전문위원단 구성․운영방안>
❚ 전문위원단 역할 - 공모방식, 참가자격, 당선자 보상방안 등 검토, 공모지침 작성 - 심사위원회 등 조직 구성 및 운영 지원 - 공모결과 기본설계 및 실시설계 반영 및 자문 ❚ 전문위원단 구성 및 운영 - 대표 PA(1) + 도시, 건축, 조경, 역사, 등 4분야 PA(5) + 시 내부(1) - 사전기획~공모결과 반영 단계에서 발생하는 현안사항에 따라 탄력적 운영

□ 발주방법

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

○ 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

○ 입찰참가자격

- 공고일 기준「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조 및 같은 법 시행령

제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당하지 아니한 자 중 다음 각 호에 해당하는 자

① 국․공립 및 정부 출연기관

② 교육법에 의한 대학, 전문대학 및 부설연구소

③ 민법 또는 다른 법률에 의해 설립된 연구기관, 단체 및 법인

○ 선정절차

입찰공고	➡	입찰 등록 및 제안서 제출	➡	제안서 평가	➡	협상대상자 선정 및 통보	➡	협상 및 계약체결

○ 제안서 평가 항목 및 배점기준(안)

- 기술능력평가(80) : 정량적 평가 + 정성적 평가

- 입찰가격평가(20)

※ 제안서 평가계획은 추후 별도수립

3		향후계획

○ `15. 6.   공모 관리용역 계약심사 의뢰

공모 관리용역 발주 및 계약, 심사위원회 등 조직 구성

○ `15. 6~7.   공고 및 접수 (공모지침 확정 및 배포, 홍보 및 질의응답)

○ `15. 7.   공동 현장조사 및 설명회

○ `15. 8.   작품등록, 심사 및 정리, 입상작품 전시

○ `15. 9월까지   공모 결과물 기본 및 실시설계 반영 및 자문

붙임 : 과업내용서 및 설계내역서 각 1부.  끝.