문서번호	슬러지재활용과-1157
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	06/04 가길현
협조
	주무관		우배용

1처리장 농축조 슬러지수집기 교체 계획

2015. 5.

난지물재생센터

1처리장 농축조 슬러지수집기 교체 계획

내구년한 경과 및 장기간 사용에 따른 노후로 효율과 기능이 저하되고 잦은 고장이 발생되고 있는 1처리장 농축조 슬러지수집기를 신품으로 교체, 슬러지 농축효율을 향상시켜 슬러지 처리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진경위

2015년 슬러지재활용분야 업무추진계획  슬러지재활용과-216 (15.02.04)

□ 2015년도 단위사업인 농축조 슬러지수집기 교체 계획임.

Ⅱ		농축조 슬러지수집기 설치 현황

보유수량 :  9대

품 명	설치위치	형식 및 규격	동력 (㎾)	단위	수량	설치 년도	내구 년한	제작회사
								(시공회사)
		계			9
슬러지수집기	1처리장 (농축조)	중앙구동식지주형Φ20m×H 3m	1.5	대	2	2013	10	동진기계
			2.2	대	2	1993	10	동진기계
슬러지수집기	2처리장 (농축조)	중앙구동식지주형Φ16.5m×H3.5m	2.2	대	3	1997	10	세대기계
슬러지수집기	2처리장 (소화농축조)	중앙구동식지주형Φ16.5m×H 3m	2.2	대	2	1997	10	세대기계

Ⅲ		교체계획

교체 대상 수량 : 슬러지1처리장 농축조 슬러지수집기 2대

대상 및 정비 내용

FRP 지붕 덮개 철거 설치

농축슬러지수집기 제작․구매 설치

Ⅳ		추 진 일 정

6월 계약심사과 계약심사 및 발주

7월 ~ 10월  농축조 슬러지수집기 제작․구매 설치

Ⅴ		발 주 방 법

계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업제품+지역)

소요예산

예 산 액 : 400,000천원

예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 오니처리유지보수, 시설비

납품기한 : 계약일로부터 120일까지.

Ⅵ		행정사항

계약심사시행 : 물품2,000만원 이상으로 본청 계약심사과 계약심사대상 사업

- 계약심사과 심사 후 결과물에 의거 발주.  끝.