문서번호	토목부-11480
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		홍숭희	06/04 代서관석
협조
	주무관		유근평

염곡지하차도 CCTV 이설 검토 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시기반시설본부

토 목 부

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

염곡지하차도 CCTV이설 검토 보고

제2염곡지하차도 공사를 위한 기존 염곡지하차도 기둥부 보강공사에 저촉되는 CCTV 이설에 대해 검토 보고 드림

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (9차: 25,000백만원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7.31.(9차 `15.3.10.~`15.12.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

관련근거

❍ 동기강 2015-230호(`15. 5. 8.) 기존염곡지하차도 구간 CCTV이설 승인 보고

❍ 남부도로사업소 기전과-1515호(`15.4.7.) CCTV이설 요청 회신

현 황

❍ 제2염곡지하차도 공사를 위한 기존 염곡지하차도 기둥부 보강공사에 저촉되는 CCTV 이설이 불가피한 실정임.

❍ 지하차도를 유지관리하고 있는 남부도로사업소 기전과와 협의결과 원인자 부담으로 이설하도록 의견 회신

CCTV 이설 계획

❍ 현 황 도

성남방향	강남방향

❍ 주요 공사 내용

공 종	형 상	수 량	비 고
CCTV 이설	스피드 돔 카메라	2

❍ 공사비 증･감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증･감	비 고
CCTV이설	-	3,811	3,811
직접공사비	-	3,811	3,811
간접공사비	-	371	371
공급가액	-	4,182	4,182
부가가치세	-	418	418
총 공 사 비	-	4,600	4,600

조 치 계 획

❍ 감리단 검토의견에 따라 실정보고 건에 대해 승인· 통보하고 설계변경 시 반영하도록 조치하고자 함.

【붙 임】 1. 감리검토의견서 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.