문서번호	기전과-3788
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
차준원	문준호	최주용	06/04 이종엽
협 조
	관리단속과장		홍영두
	주무관		이명호

『2014년 횡단보도 신설 교통신호기공사(송정동)』

설계변경 검토 보고

2015. 06

성동도로사업소

(기 전 과)

『2014년 횡단보도 신설 교통신호기공사(송정동)』

설계변경 검토 보고

2014년 횡단보도 신설 교통신호기공사(송정동)에 대하여 아래와 같이 설계변경을 추진하고자 합니다.

관련근거

○ 도로교통공단 안전시설부-123(2015.06.02) : 설계변경 기술검토의견서 제출

공사개요

구 분	2014년 횡단보도 신설 교통신호기공사(송정동)	비 고
공사기간	2014.12.16 ~ 2015.06.30
도 급 자	㈜민호전설 대표 김민희
도 급 비	16,038,000
감 리 사	도로교통공단

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 교통신호기 시공에 따른 작업물량 증감

- 신규공종(전원선(가공), 신호지주 기초-합판, 조가선, 교통정리요원) 추가

○ 도급비 변경내용

공 사 명	도 급 비		변 경 사 유	비 고
	당 초	변 경
2014년 횡단보도 신설 교통신호기공사(송정동)	16,038,000	15,818,000	신규공종 및 물량증감에 따른 금액변경	감)220,000

○ 주요공종 변경내용

연번	공 종		2014년 횡단보도 신설 교통신호기공사(송정동)			비고
			변경전	변경후	증감
1	지주기초 및 앙카 Φ250×1.8m(볼트용융도금)/공통	신설	2	0	감)2	감)-2,382,446
2	지주기초 및 앙카(거푸집 0.5m) Φ250×1.8m(볼트용융도금)/공통	신설	0	2	증)2	증) 1,981,166
3	조가선 아연도 강연선(22SQ,7/2)	신설	63	0	감)63	감) -89,838
4	조가선 와이어 로프(6㎜, 철심)	신설	0	72	증)72	증) 159,696
5	신호케이블(지중 2선)	신설	8	10	증)2	증) 27,334
6	신호케이블(가공 2선)	신설	29	33	증)4	증) 79,464
7	전원선(가공 1선)	신설	0	5	증)5	증) 30,645
8	전송선(지중 1선)	신설	13	15	증)2	증) 6,176
9	전송선(가공 1선)	신설	63	72	증)9	증) 31,887
10	후강전선관 배관(노출)	신설	8	0	감)8	감) -138,792
11	워샤캡 Φ54㎜	신설	1	0	감)1	감) -10,684
12	교통정리요원배치	신설	0	2	증)2	증) 151,654
13	음향신호기 기능검사비 (실정보고 미반영분)	신설	2	2	-	증) 76,000

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리,

보행불편해소를위한횡단보도확충정비, 시설비(401-01)

조치의견

○ 상기와 같이 2014년 횡단보도 신설 교통신호기공사(송정동)에 대하여 설계변경      하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙     임 : 1. 설계변경서 제출 각 1부. 끝.