문서번호	급수운영과-12643
결재일자	2015.6.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	06/04 조면행
협 조

단수계획 검토보고

2015. 06.

강서수도사업소

2015년 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사에 따른 단수작업계획서가 제출되어 단수작업 및 홍보 검토 보고임.

2015.  6.  4.

보고자 : 시설8급  성명  여수현

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : 7구간 D=150mm, L=155m

다. 시공회사 : 윤석산업(주) 대표자 이행철

2. 단수 계획 제출(시설관리공단)

가. 단수일정 및 사유

단수구간 번호	단 수 위 치	단 수 예정일	단수 시간	단수 세대	작업 일수	단수 사유	비고
7구간	신월1동242-42~242-23호간	2015.06.9.~ 2015.06.12	09:30 ~17:00	25세대	4일	노후관(100) 교체

나. 일정별 작업 세부계획

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고(산출근거)
제수변 개폐	30분	D80~150mm 3개소
기존관 절단	30분	D100mm 2개소
배관 작업(본관연결)	380분	D150mm 배관 작업
세척 및 통수	40분	D100mm 퇴수밸브,소화전 1개소
합 계	8시간 00분

다. 홍보 계획

○ 홍보매체를 통한 단수홍보

- 상수도홈페이지

○ 단수지역 안내문 배포 및 부착 (시공사 및 감리, 단수 2~3일전 시행)

- 단수지역에 가가호호 방문하여 단수안내문 부착

- 벽보용 안내문은 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목 내 부착

- 단수 전 사용할 물은 미리 용기에 받도록 안내

3. 단수계획 검토

가.구간별 검토

단수구간 번호	단수 위치	단 수 예정일	단수 시간	단수 세대	단수 사유	검토 결과
7구간	신월1동242-42~242-23호간	2015.06.9.~ 2015.06.12	09:30 ~17:00	25세대	4일	작업에 따른 작업시간 검토결과 적정함

나. 노후 상수도관 교체 작업시간과 단수시간이 적정하여 단수 작업을 승인코자 하며 이에 현장 홍보를 철저히 하여 단수민원이 최소화될 수 있도록 시설관리공단에 통보하여 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

4. 기타 행정사항

가. 공사장 안내간판 및 안전시설 설치 철저 지도감독

나. 공사 관계자 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	윤석산업	02-467-5705
현장 대리인	김 용 만	*************
감 독 자	이 지 환	*************
발주처 담당	여 수 현	02-3146-3945

붙 임  : 단수계획서 및 홍보문 1부.  끝.