문서번호	건축부-6392
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김현지		안연수	06/04 代강성욱
협조
	전문관		남궁환

서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사
기술지도 자문회의(4차) 결과 보고

2015. 6.

도시기반시설본부

건  축  부

서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

기술지도 자문회의(4차) 결과 보고

‘서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사’ 관련
현장 내 지대석 설치 완료에 따라 현장 확인과 보수방향에 대한 기술지도 자문회의 개최 결과 보고임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

○ 위    치 : 종로구 종로 288 흥인지문 일원 외1(사적 제10호)

○ 공사내용

- 성곽 복원 : 흥인지문 북측 멸실된 21m 성곽, 지대석 및 여장공사

- 단절된 성곽 연계성 회복 : 흥인지문 양측, 광희문 북측 총 105.7m 바닥포장 등

○ 감 리 단 : ㈜한인전통건축감리단

○ 시 공 사 : ㈜창의건설

○ 공 사 비 : 1,467백만원

○ 공사기간 : 2014.12.30~2015.10.25

□ 4차 자문회의 개요

○ 일    시 : 2015. 6. 3. (수) 14:00

○ 장    소 : 흥인지문 북측 성곽 복원공사 현장

○ 참석자

- 서 울 시 : 문화체육관광본부 한양도성도감, 도기본 건축부 문화시설과

- 현장관계자 : 문화재감리(한인전통건축감리단), 현장대리인(창의건설)
- 기술지도 자문단(3명) : 손영식(성곽), 심광주(성곽), 박기화(사적보존관리)

□ 자문결과 정리

○ 흥인지문 북측 성벽복원

- 복원구간의 해체과정에서 확인된 성돌의 크기와 가공방법의 다양성을 감안하여, 복원성벽 성돌의 크기와 가공방법이 일률적으로 규격화되지 않도록 처리

- 면석 상부가 돌출되면 편하중이 발생하여 성벽의 안전성에 문제가 생길 수 있음으로 신중하게 가공 필요

- 복원 여장의 형태는 기존 여장이 잘 보존된 몇 개의 구간을 조사하여 최적의 복원방법을 결정하는 것이 필요

- 성벽 단면 구간의 마감 방법은 한양도성자문위원회의 의견을 반영하여 체성벽 성돌과 같은 재질의 석재로 마감하되, 가공방법 및 크기 등을 달리하여 구분

- 지대석의 가공방법은 해체된 지대석의 가공방법을 고려할 때 적절한 것으로 판단됨

해체된 지대석 유구	기존 지대석	가공된 지대석

□ 처리의견 및 행정처리

○ 성돌의 크기와 가공방법 등에 대해 문화재 기술지도 자문의견을 반영하여 보수․정비토록 감리자․시공사에 지시하고, 성벽여장 복원방법은 시범시축하여 2015.6.15.(월) 기술지도 자문(5차) 실시.

○ 설계도서에 지정된 지대석가공 및 축조방식이 현장에서 확인된 유구와 상이한 건에 대한 기술지도 자문결과, 현장에서 확인된 가공방법으로 시공함이 적절하다고 검토되어 이에 대한 실정 보고 건에 대해 승인하고, 추후 설계변경 하여 정산조치 하고자 함.

붙 임 : 자문의견서 및 참석자 서명부 각1부.  끝.