함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(4차 최종) 시행(서초1동외 10개동 상수도공사)

1.  사업소에서 시행하는 『2014년 서초1동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 설계변경 심의를 개최하고 아래와 같이 설계변경(4차-최종)을 시행코자 합니다.

가. 공  사  명 : 2014년 서초동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사  개요 : 당초 D=15~300mm, L=1,734m

변경 D=15~300mm, L=1,994m

다. 계약상대자 : 태안건설(주) 대표 박영수

라. 계약  기간 : 2014. 5. 29~2015. 6.30

마. 변경  사유 : 공종별 계약물량 증감 및 신규공종 발생

바. 설계변경금액

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
총 부 기 금 액	553,009,530	550,670,000	감)2,339,530
공 급 가 액	502,735,936	500,609,091
부 가 가 치 세	50,273,594	50,060,909

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비(급수공사)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(간선배관비)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지(교체장애)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지(보온재)

붙 임 : 1. 설계변경 관계 서류 각 1부.  끝.

주무관	안규태		주무관	윤복철		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	06/04 정경효
협조자	주무관	강희창
시행	시설관리과-11514	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4번지 시설관리과	/
전화	02-3146-4909	/전송	02-3146-4909	/		/	대시민공개