문서번호	시설관리과-3027
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강동수도사업소장
강순길	김종희	이계환		03/05 원응연
협 조

거마가압장 펌프교체 추진계획

2014. 3.

강동수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

거마가압장 모터펌프교체 추진계획

가압장 모터펌프 전압의 특고압 저압화로 가동전력을 절감하여 국가

적 전력난 해소와 원전하나 줄이기에 동참하며, 노후,양정과다 펌프를 적합한 펌프로  교체,에너지 절약과 효율적이고 안정적인 수돗물  공급

사업개요

교체대상

- 모터펌프 110KW(75HP)×35m×3300V×4대

교체내용

- 모터펌프 55KW×2대  신규 제작설치(특고압 저압화3.3KV→380V)

- 모터펌프110KW×2대 신규 제작설치(특고압 저압화3.3KV→380V)

- 부속배관 및 기타 공사 1식

추진일정

본부 펌프 용량검토   : 2014. 1. 25 ~ 3.10

실시설계 및 계약심사 : 2014. 3. 5 ~ 3. 14

발주 및 계약         : 2014. 3.14 ~ 3. 27

착공 및 준공         : 2014. 3.28 ~ 6. 30

소요예산

예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 기계장치, 시설비등

소요예산 : 150,000천원 (펌프 및 부속배관 제작설치 1식)

집행방법

입찰 및 구매방법 : 조달구매

철거펌프 처리 : 노후 성능저하에 의한 재사용 불가로 고재처리

행정사항

준공후 사업완료 내역 본부 보고 및  시설물 관리 현황 수정. 끝.

거마가압장 현장사진

거마가압장 수배전반 사진

거마가압장 펌프사진