투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	계약변경(정산) 의뢰(서울대공원 동물탈출방지휀스 설치사업)

1. 조경과-2764(2015.05.21.)호와 관련입니다.

2.「서울대공원 동물탈출방지휀스 설치사업」에 대해 아래와 같이 변경계약(정산)을 의뢰합니다.

가. 계약현황

1) 사 업 명 : 서울대공원 동물탈출방지휀스 설치사업

2) 계 약 자 : ㈜열린문 대표 박성노

3) 계약금액 : 금1,104,000,000원

4) 계약기간 : 2014. 9. 24 ~ 2015. 5. 22

나. 변경내용 및 사유

1) 금액변경

구 분	공사비 변경내역			비고
	변경 전	변경 후	증감
총 공사비	1,104,000,000원	1,103,820,000원	감 180,000원

2) 변경사유 : 현장여건 반영 및 미집행 보험료 등 정산

다. 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도향상, 동물건강증진 및 종보전, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전시설 보수 및 정비, 시설비(2014년 사고이월사업)

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 제비율검증 확인서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	서울대공원장
주무관	김성태		주무관	김흔진		조경과장	05/21 이성주
협조자
시행	조경과-2770	(		)	접수		(		)
우	427-080	경기 과천시 막계동 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7542	/전송	02-500-7993	/	kst2006@seoul.go.kr	/	대시민공개