문서번호	급수운영과-4988
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★급수운영과장	강서수도사업소장
이용호		조면행	03/05 이상래
협 조
	시설관리과장			이자원
	주무관			이상무

“직결급수 전환 불가능 주택”

소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 계획

2014. 03

강서수도사업소

(급수운영과)

“직결급수 전환 불가능 주택”

소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 계획

수압부족 등으로 인해 직결급수 전환이 불가능한 주택에 대해 불가원인을 해소하고 직결급수로 전환하여 수질을 개선함으로써 시민들에게 맑고 깨끗한 아리수를 공급하고자 함.

관련근거

본부배수과-679(‘14.2.5)호 『소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 추진』

본부배수과-2712(‘13.5.24)호 『소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 방안』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 추진

사업대상 : 총 4,967개소(‘14년 268개소)

사업기간 : 2010~2014년

사 업 비 : 572백만원(‘14년 95백만원)

※ 예산과목 : 직결급수 전환 및 물탱크 철거, 수선유지교체비, 지원사업성 시설비

연차별 추진실적 및 계획

(단위:개소)

구 분		계	’12년이전	’13년	’14년	비 고
계		4,967	2,510	2,189	268
직결급수 전환 및 철거	가능주택	2,056	1,587	469	-
	불가주택	268	-	-	268	양천-125 구로-114 강서-29
미사용 물탱크 철거		2,643	923	1,720	-
사 업 비		572백만원	197백만원	280백만원	95백만원

‘14년 추진계획

‘14년 추진목표 : 268개소(양천-125, 구로-114, 강서-29)

‘14년 사 업 비 : 95백만원

직결급수대상 세부현황

(단위:개소)

구 분	추진 대상	직결급수 전환 불가사유							사업비 (백만원)	비고
		수압 부족	관노후	관경 협소	수요가 반대
					소 계	적극반대	비상용수	설득가능
개소	268	3	7	9	249	89	-	160	95

추진방법

- 수압부족(3개소) : 직결급수 가능 수압으로 조정하여 추진

- 관노후 ․ 관경협소(16개소) : 옥내배관교체 지원사업과 병행 추진

- 수요가 반대(249개소) : 적극 설득 추진(지역담당자별 홍보 및 독려)

- 직결급수대상 가구별 직접 홍보 실시(지역담당자별)

•홍보방법 : 안내홍보문 우편 발송, 가구별 방문 설득 병행 실시

•홍보시기 : ‘14.2~3월

•홍보내용

- 물탱크 사용시 관리비용 부담(청소비 등)

- 관리부실시(물탱크청소 미실시 등) 이물질 및 이끼 발생으로 수질

오염 발생 가능성

- 소형물탱크청소 의무화 시행(2014.7.1.일) 안내문 배포 홍보

- 급수공사 시공업체(연간단가계약업체)를 활용하여 직접 시행

• 직결급수 전환(우회배관) 및 물탱크 철거, 폐기물처리까지 시행

• 소형가압펌프(저소음하향식) 설치 필요시 펌프는 수요가에서 구매           토록하고 설치는 사업소에서 시행(연간단가계약업체 활용)

월별추진목표

구분(월)	합계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	비고
개소	268	34	34	34	34	33	33	33	33

행정 사항

’14년 추진 실적 보고(본부) : 매월 25일까지(3월부터 보고)

- 실적보고(양식)

※ 시설관리과는 매월 24일까지 자료제출

담당자별 집중 홍보(우편물발송 등) : 3.10일까지

직결급수 전환 건물에 대한 현황 자료 GIS에 입력 : 직결급수전환 완료시

※ GIS시스템 : 행정지원 → 급수설비관리 → 직결급수관리

따로붙임 : 1. 직결급수전환 대상 현황 1부.

2. 직결급수전환 실적 관리대장(양식) 1부.

3. 실적보고(양식) 1부.

4. 홍보문(직결급수 시행) 1부.

5. 안내문(소형물탱크청소의무화 시행) 1부.  끝.