투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	강서구청장(도로과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 연기 승인 통보(가로공원길 지하주차장 건설공사 구간)

1. 강서구청 도로과-8470(2015.06.04.)호 와 관련입니다.

2.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1)공사명 : 가로공원길 지하주차장 건설공사 구간 교통안전시설물 설치공사

2)원인자 : 강서구청(도로과)

3)시공사 : ㈜신흥트래픽

4)공사기간

- 당초 : 2010.09.29.~2014.12.31

- 변경 : 2010.09.29.~2015.12.31

5)감리사 : ㈜건영이앤씨

3. 연기사유 : 예산부족에 따른 공사지연으로 공사 기간 연장.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	양상규		기전과장	06/05 박재경
협조자
시행	기전과-6833	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개