투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	2015년 서울대공원 노후조경시설 정비공사 준공기한 연기 시행

우리공원 내에서 공사 시행 중인  『2015년 서울대공원 노후조경시설 정비공사」의 준공기한 연기를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 서울대공원 노후조경시설 정비공사

나. 공사내용 : 호랑이사관람데크지붕설치 1개소, 파고라 등 3개소 설치, 수목식재 등

다. 공사기간(당초) : 2015.5.1. ~ 2015.6.6.9

라. 도 급 액 : 금80,186,000원(금팔천일십팔만육천원)

마. 도 급 사 : ㈜장원조경 대표 신경준

바. 내역변경 : 변경없음

사. 준공기한 연기 : 2015.6.19일까지 (연기사유서 별첨)

붙임  1. 준공기한 연기서 1부       2. 검토보고서 1부.  끝.

								조경과장
주무관							오맹렬				주무관					강금완					조경과장					06/05 이성주
협조자
시행			조경과-3033										(						)		접수												(						)
우	427-702					경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 조경과																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화									/전송			02-500-7993					/														/	부분공개(5)