투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사(노면표시) 승인기간 연기(2014-0204-007)

1. 한국토지주택공사 서울지역본부 단지사업2부-991(2015.5.28.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 요청한 교통안전시설물 원인자부담공사 승인기간 연기 요청에 대해 아래와 같이 승인하니, 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방」에 맞게  설치하여 주시고 T-Gis시스템 입력 후 준공확인 요청하여 주시기 바랍니다.

※ 승인기간 연장

공 사 명		행당 도시개발사업 교통안전 교통안전시설물 설치 원인자 부담공사(노면표시)	비 고
공사기간	당초	2014.8.21 ~ 2014.12. 21.	공사관리번호 2014-0204-007
	변경	2014.8.21 ~ 2015.06. 30.
연기 사유		교통규제심의사항 반영 및 지장전주 이설 지연

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	이기영		도로보수과장	06/05 국중진
협조자
시행	도로보수과-2299	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화		/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개