문서번호	방재시설부-7586
결재일자	2015.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
노태학		이도헌	06/05 임춘근
협 조
	주무관			장수철

『위례신도시 차집관로 증설공사』

문정지구 오수처리 연결간공사 외 2건 검토 보고

2015. 6

『위례신도시 차집관로 증설공사』

문정지구 오수관 연결관공사 외2건 검토 보고

위례신도시 차집관로 증설공사와 관련하여 감리단으로부터 문정지구 오수관 연결관공사 외 2건과 관련 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 위례신도시 차집관로증설공사

❍ 규    모

- 차집관로부설(D1100) : 4.4km, 맨홀 52개소 설치

❍ 사업기간 : 2013. 12 ∼ 2015. 06

❍ 감리사/시공사 : 수성엔지니어링/(주)건영외 1개사

❍ 도 급 비 : 9,068백만원

실정보고 내용

❍ 현황 및 보고내용

1.문정지구 오수처리 연결관공사

- SH공사 요청에 따라 문정지구 오수처리 관로(D500) 추가 매설시행

위치도	평면도

․SH공사택지조성팀-1447호(2015.3.11.)․위례감제2015-75호(2015.06.04.)

- 주요공종 증·감현황

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비 고
			당 초	변 경
오수관로 부설	D500	m	-	152	증) 152	낙찰률 85%적용
가시설공	TSPL판넬	m	-	152	증) 152

- 개략공사비 : 증) 249,986천원

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	-	170,021,406	증) 170,021,406
제경비	-	79,964,594	증) 79,964,594
도급액	-	249,986,000	증) 249,986,000
관급자재비	-	20,103,000	증) 20,103,000
총공사비	-	270,089,000	증) 270,089,000

2. 포장공 수량 정산 반영 건

- 자전거도로 손괴에 대한 관리청복구비(송파구청) 납부에 따른 수량 및 관급자재 정산시행

․ 위례감 제2015-73호(2015.06.03.)

- 주요공종 증·감현황

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비 고
			당 초	변 경
포장깨기 및 상차	아스콘	m3	383	-	감) 383
투수콘크리트 포장	아스콘	a	16	-	감) 16

- 개략공사비 : 감) 51,117천원

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
포장공 이관처리	34,720,087	-	감) 34,720,087
제경비	16,396,913	-	감) 30,819,053
도급액	51,117,000	-	감) 51,117,000
관급자재비	121,591,000	-	감) 121,591,000
폐기물처리비	13,530,000	-	감) 13,530,000
총공사비	186,238,000		감) 186,238,000

3. 차집관로 수량 정산반영 건

- 차집관로 부설시 현장여건 반영에 따라 관로연장 및 맨홀수량 증가 정산

- 하천인접구간 관로부설이 하상에서 이격(4m~5m)되어 하상 침식 우려가 없어 강판매몰 수량공제 정산반영.

․ 위례감 제2015-74호(2015.06.03.)

도 면 1	도 면 2

- 주요공종 증·감현황

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비 고
			당 초	변 경
차집관로	D800~D1100	m	4,395	4,413	증) 18
매몰강판손료	TSPL판넬	ton	198	108	감) 90

- 개략공사비 : 감) 63,624천원

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
차집관로 구간변경외	4,332,402,196	4,280,590,682	감) 51,811,514
제경비	2,064,603,804	2,052,791,318	감) 11,812,486
도급액	6,397,006,000	6,333,382,000	감) 63,624,000
관급자재비	1,677,164,000	1,674,335,000	감) 2,289,000
총공사비	8,074,170,000	8,007,717,000	감) 66,453,000

감리검토내용

❍ 상기와 같이 문정지구 오수처리 연결관공사 외 2건을 발주처 협의 및 현장여건 반영 적용에 따라 추후 설계변경시 반영처리코자 함.

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 위례지구 차집관로 부설공사 감리단이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 현장실정보고 검토서 각 1부. 끝.