투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울특별시농수산식품공사장(공사관리팀장)
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기한연장 승인(가락시장 시설현대화사업-신호)

1. 서울특별시농수산식품공사 공사관리팀-32호(2015.6.01.)와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 시행하고 있는「가락시장 시설현대화사업 관련 교통안전시설(신호)원인자부담공사」의 공사(준공)기한 연장승인요청에 대하여 아래와 같이 연장승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 가락시장 시설현대화사업 관련  교통안전시설(신호)원인자부담공사

나. 공사장소 : 송파구 중대로 가락시장 남1문사거리(롯데마트)

다. 공사내용 : 교통신호기 신설 및 이설 등

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 연장사유 : 협의기간소요 등

- 당 초 : 2015. 4. 28. ~ 2015. 6. 10.

- 변 경 : 2015. 4. 28. ~ 2015. 6. 30.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	06/05 代김현기
협조자
시행	기전과-5063	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개