문서번호	교통운영과-10972
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장
박평근	최정규	06/08 강진동

2015년  제4차 소위원회 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

도시교통본부

(교통운영과)

『2015년  제4차 소위원회 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2015 6. 4(목) 15:00 ~ 17:30

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

❍ 참석위원 : 4명(당연직 1명, 위촉직 : 3명)

∙ 당연직 : 교통운영과장

∙ 위촉직 :  신건철 위원, 이동원 위원, 박상섭 위원

∙ 간  사 : 교통시설팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 4건

∙ 조건부시행 4건

자문안건 (1) : 우이~신설 도시철도(3공구) 건설공사 (변경)

❍ 자문결과 : 조건부 시행(지정위원 검토 : 박상섭, 이동원, 신건철)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
솔샘길, 아리랑고개길	2010.4.1. ~2016.11.30	24시간	단계별 1~2개차로	우이신설경전철주식회사

❍ 자문회의 검토의견

1. 5단계(환기구 및 정거장) 실제 공사기간을 제시하기 바람

2. 5단계 환기구 공사시 점유면적을 축소하여 도로선형을 유지하기 바람

3. 6단계 정거장 공사시 복공판 설치와 E/S 설치공사에 대한 단계를 세분화하여 좌회전 차로를 연장하고, 도로선형을 유지하기 바람

4. 10번 정거장 공사시 항타작업에 대한 공사 점유계획을 추가하기 바람

5. 21-1단계 작업자 축소 및 보도 셋백을 검토하여 차로폭을 추가하는 방안을 제시하기 바람

6. 21단계 임시보행로를 추가확보하는 방안과 점유면적을 축소하여 차로폭을 추가확보하는 방안을 제시하기 바람

자문안건 (2) : 서울지하철 9후선 3단계 919공구 건설공사 (변경)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
백제고분로	2015.6.30. ~2015.12.31	24시간	8.6~10.5m	도시기반시설본부

❍ 자문회의 검토의견

1. 유턴 폐쇄에 따른 전방으로 유턴 이전 또는 후방에 좌회전 신설을 검토하는 방안을 제시하기 바람

자문안건 (3) : 둔촌동 하수암거 설치공사 (재심의)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
강동대로, 양재대로	2016.6.15. ~2016.11.30	24시간	단계별 1~2개차로	강동구청

❍ 자문회의 검토의견

1. 19단계 교차로 횡단보도 인접 공사는 사전에 복공판 설치 공사를 완료하여 정체를 최소화하기 바람

2. 2단계 정지선을 후퇴하기 바람

3. 19단계 교차로 통과전 4차로에서 통과후 3차로 감소하여 병목현상이 우려됨으로 사전에 1개차로를 차단하여 교차로 혼잡을 방지하기 바람

4. 안전에 유의하여 공사를 시행하기 바람

자문안건 (4) : 하남미사~위례연계(2구간) 열배관 공사 (2차변경)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
강동대로, 양재대로	2015.6.16. ~12.25	24시간	단계별 1~2개차로	하남ES

❍ 자문회의 검토의견

1. 13단계 통제수는 모범운전수를 배치하고, 사전에 교육을 하기 바람

2. 13, 14, 15단계 교차로 바깥차로는 우회전 전용으로 하고, 테이퍼 처리하기 바람

3. 20단계 차로 통과전 5차로에서 통과후 4차로 감소하여 병목현상이 우려됨으로 사전에 1개차로를 차단하여 교차로 혼잡을 방지하기 바람

4. 20단계 좌회전 차로를 추가하기 바라며, 야간공사 부분내용을 추가하기 바람

붙 임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부. 끝.